- 남양주시 청년창업복합단지(Youth Start-up Campus N) 조성사업 -

건축 설계용역 과업내용서

2019. 7.

-  목   차  -

제1장 설계 일반사항	1

1. 과업명칭	1

2. 과업개요	1

3. 과업기간	1

4. 과업범위	2

5. 일반사항	2

6. 법령 등의 적용	5

7. 설계용역 손해배상보험 또는 공제 가입	6

8. 계약의 해지	6

9. 대가의 조정	6

제2장 분야별 설계	7

1. 설계의 기본방향	7

2. 공공건축물 사업계획 사전검토 사항	9

3. 사전조사에 관한 사항	12

4. 건축분야	13

5. 설비분야	17

6. 토목･조경분야	18

7. 전기분야	19

8. 통신분야	20

제3장 설계 진행사항	21

1. 설계도서 작성	21

2. 설계용역 착수 시 제출서류	22

3. 설계도서 납품목록	22

[서식1] 보안각서	24

[서식2] 월간업무보고	25

[서식3] 책임기술자선임계	26

[서식4] 설계 예정공정표(예시)	27

제1장  설계 일반사항

1. 과업명칭 : 남양주시 청년창업복합단지(Youth Start-up Campus N) 조성사업 건축설계 용역

2. 과업개요

가. 개 요

구 분	세 부 내 용	비 고
위 치	남양주시 평내동 660-1
대지면적	450.3㎡
연 면 적	1,434㎡ (±5% 이내)
층 수	지하1층/지상5층(연면적 범위내에서 층수 변경 제안 가능)
용 도	교육연구시설
주요시설	전시갤러리, 이벤트홀, 일자리센터, 동아리방, 회의실, 영상스튜디오, 공방, 요리(카페)실습실 등
추정공사비	3,555,847천원 (부가세 포함)
추정설계비	206,761천원 (손해배상보험료/부가세 등 포함)

※ 과업내용 : 남양주시 청년창업복합단지 조성사업을 위한 기초조사(현황측량, 지반조사 등)와 실시설계용역, 관련 법령에 의한 인증 관련 설계업무 등

3. 과업기간

가. 착수일로부터 120일(각종 인･허가, 심의, 위원회 자문, 일상감사 및 계약심사 기간 등 포함)

나. 과업수행기간 연장 또는 정지는 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣, ｢용역계약일반조건｣에 의하되, 다음의 경우에도 연장 또는 정지할 수 있다.

1) 발주기관 방침에 의하여 과업수행 중단 또는 과업내용 변경 되었을 경우

2) 관련기관(부서) 협의, 자문, 심의, 심사, 검토 등 기간이 소요되는 경우

3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능한 경우

4) 기타 발주기관 필요에 의한 경우

다. 용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련자료 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행하여야 한다.

4. 과업범위

가. 설계도서 작성(도면, 시방서, 구조계산서, 내역서, 일위대가표, 단가조사표, 수량산출서, 예정공정표 및 기타 국토교통부령이 정하는 공사에 필요한 서류)

나. 주민설명회, 설계보고회 등에 대한 업무수행(필요시)

다. 기술자문심의, 건축심의, 건축협의, 실시계획인가, 계약심사, 일상감사 등 각종 심의, 협의, 심사, 감사 등에 필요한 서류작성 및 행정절차이행

라. 현황측량 및 지질조사 등 설계에 필요한 일체의 조사와 보고서 작성

마. ⌜장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙⌟에 의한 장애물 없는 생활환경 예비인증 및 기타 관련법령에 의해 필요한 각종 예비인증 취득

바. 설계 안전성 검토, 우수유출 저감대책, 각종 영향평가 등 관련법령에 해당할 경우 서류작성 및 절차이행

사. 기타 본 과업내용서에서 정하는 사항 및 당해 사업 수행에 있어 필요하다고 인정되어 발주기관이 요구하는 사항

5. 일반사항

가. 설계자 의무

1) 수급인은 본 과업내용서 및 관계법령에 따라 신의성실한 자세로서 과업을 수행하고, 설계 시 의문사항이나 문제점이 발생할 경우에는 발주기관과 협의 후 이행한다.

2) 과업내용서를 충분히 숙지한 후 설계도서를 작성하며, 본 설계용역 시 취득한 제반 비밀사항에 대하여는 누설을 금한다.

3) 설계자는 본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 주요시설을 조사하여 충분한 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하여야 한다.

4) 용역수행을 위하여 투입된 인력의 수 및 기술자의 능력이 본 용역을 성공적으로 수행하기에 부족하다고 발주기관이 판단하여 보완 지시할 경우 설계자는 즉시 보완하여야 하며, 이로 인한 지연부분이 발생할 경우에는 대책을 수립하여 발주기관에게 제출하여야 한다.

5) 모든 자재는 KS제품 적용을 우선으로 하되 사용자재 및 시공방법 등을 검토하여 최적의 제품으로 설계한다.

나. 감독

1) 수급인은 발주기관에서 임명하는 감독원의 지시를 받아서 본 과업을 수행하여야 한다.

2) 과업 지시내용 및 계약서상 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 감독원의 지시에 따른다.

3) 감독원은 과업 수행 중 용역대리인이나 수급인이 과업수행에 부적당 하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있으며, 수급인은 지체없이 이를 이행하여야 한다.

다. 업무협의

1) 설계자는 설계진행과 관련하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. (단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.)

2) 발주기관은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계 도서를 제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며, 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

3) 설계자는 각종회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하여 회의에 참석하여야 한다.

라. 보고

설계자는 아래 각 사항에 대하여 보고 후 검토된 과업을 진행한다.

1) 착수 보고 : 착수일로부터 10일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최하며, 착수보고 시 책임기술자는 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

2) 계획설계 보고 : 건축물에 대한 설계목표를 정하고 가능한 해법을 제시하는 단계로 현황측량, 지반조사, 지장물건 조사, 관련법규 등 기초조사 항목을 검토하여 2개 이상의 계획안을 발주기관에게 작성･보고한다.

※ 설계공모에 선정된 공모작에 공모심사위원 의견 및 발주기관 요구사항 등을 반영한 계획안을 제출한다.

3) 중간설계 보고 : 계획설계 계획안에 발주기관의 요구사항을 반영하여 구체화한 서류를 작성･보고한다.

※ 설계자는 각종 심의, 인증 등 행정절차 이행을 위한 설계용역 정지 기간에도 진행사항을 보고하여야 한다.

4) 실시설계 보고 : 발주기관에게 제출된 납품도서로 입찰, 계약 및 공사에 필요한 업무를 수행할 수 있도록 설계 도서를 제작･보고한다.

5) 월별업무보고 : 설계자는 매월 첫째 주에 월간 업무수행사항 및 예정사항 등을 작성 제출･보고한다.(서식2)

6) 수시 보고 : 기타 발주기관으로부터 보고 요구가 있는 경우 또는, 설계자가 설계 진행상 중대한 사항을 인지한 경우

마. 성과품 납품시기

1) 계획설계(안) 납품 : 착수일로부터 30일 이내

2) 중간설계도서 납품 : 착수일로부터 90일 이내

※ 착수일로부터 60일이내 건축허가 신청

3) 실시설계도서 납품 : 착수일로부터 120일 이내

※ 각종 심의, 심사, 협의 등 설계도서 납품 : 발주처와 협의

바. 각종 서류작성 및 행정절차이행

1) 설계자는 본 과업과 관련하여 각종 심의, 협의, 심사, 감사, 예비인증 등에 필요한 서류를 작성하여 관련기관(부서)에 제출･설명하여야 한다.

2) 설계용역 계약자는 설계와 관련된 각종 공청회 및 설계심의회에 참석하여 설명은 물론 자료를 작성하고, 보완 요구사항이 있는 경우는 이를 즉시 보완조치 하여야 한다.

3) 설계자는 설계기간 또는 완료 후에라도 공사 착공에 필요한 제반 행정절차(심의, 심사, 인․허가협의 등)가 조속히 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야 하며, 이를 수행함에 있어 발주기관이 요청하는 사항 및 행정절차상 필요한 사항이 있을 시에는 이를 보완하여야 한다.

사. 성과품의 소유

1) 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품은 발주기관의 소유로 하고 발주기관의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

2) 본 용역 수행으로 생성된 성과품의 저작권은 본 용역계약이 완료된 날로부터 발주기관의 소유로 한다.

3) 본 용역 수행에 있어 제3자 권리로 되어 있는 특허권, 지적재산권 등을 발주기관의 동의 없이 사용하였을 경우 설계자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

아. 설계자 유의사항

1) 본 과업내용서는 설계자 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관의 해석 및 의견에 따른다.

2) 과업 수행에는 필요하나 관련법규 및 과업내용서에 누락된 사항이 있는 경우에는 발주기관과 협의 후 발주기관의 결정을 따르며, 누락된 사항의 시행에 필요한 비용은 설계자 부담으로 한다.

자. 관계기술자 협력

｢건축법시행령｣ 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 ｢건축물의 설비기준 등에 관한 규칙｣ 제3조(관계전문기술자의 협력사항) 규정에 해당하는 건축물에 대하여는 관계법령에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다. 다만, 건축구조의 경우에는 건축물의 규모와 관계없이 건축구조기술사가 건축물의 구조도, 구조계산서 등 구조 관련 서류를 작성하고 서명날인 하여야 한다.

차. 참여기술자 변경

본 과업수행 시 과업 참여기술자의 퇴직 등 변경이 불가피하여 변경할 경우 사전에 발주기관의 승인을 받아야하며, 동등이상의 사업수행능력을 가진 기술자를 배치하여야 한다.

카. 납품 이후 설계 하자 시

설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 관계법규 저촉 등으로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야 한다.

6. 법령 등의 적용

가. 법령 등의 적용기준

설계자는 ｢건축법｣, ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣, ｢소방법｣, ｢에너지 이용 합리화법｣, ｢전기사업법｣, ｢전기통신기본법｣, ｢정보통신공사업법｣, ｢신에너지 및 재생에너지 개발･이용･보급촉진법｣ 및 기타 관련법규, 훈령, 예규, 고시, 조례 등에 적합하게 설계하여야 한다.

7. 설계용역 손해배상보험 또는 공제 가입

가. 수급인은 본 용역 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에 대비하여 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입하여야 한다.

나. 보험 또는 공제증서는 용역을 완료하기 전에 제출하여야 한다.

다. 기타 보험 또는 공제가입에 따른 세부사항은 국토교통부 고시 제2015-762호 ｢설계･건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령｣의 기준에 따른다.

8. 계약의 해지

가. 계약의 해지는 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣, ｢용역계약일반조건｣에 의하되, 다음의 경우에도 계약을 해지할 수 있다.

1) 설계 납품이 지연되거나 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 감독원의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 부득이한 사유로 본 공사 건설계획을 중단할 때

4) 기타 계약조건을 위반할 때

9. 대가의 조정

가. 용역비 변경 및 정산

｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣, ｢용역계약일반조건｣ 등 관계법령에서 정하는 바에 의하여 용역비 변경 및 정산하여야 한다.

제2장  분야별 설계

1. 설계의 기본방향

가. 설계 방향

1) 관계법령 및 규정에 적합하고, 주변환경 등에 조화를 이루며 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하고, 누구나 이용이 편리하도록 계획하여야 한다.

2) 건축물의 용도에 적합하도록 층간 소음, 이용자 동선 등을 고려하여 실을 배치하고 편리성과 안전성 등을 고려하여 설계하여야한다.

3) 관리운영이 쉽고 운영비가 저렴한 에너지절약형 및 환경친화형으로 설계한다.

4) 건물의 기능, 개방성, 상징성 등을 감안하여 건물의 골조는 철골조, 외부마감은 커튼월, 내부마감은 자연친화적인 재료(우드 등)로 계획한다.

5) ⌜장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙⌟에 의한 장애물 없는 생활환경 예비인증 및 기타 관련법령에 의해 필요한 각종 예비인증을 취득하여야 한다.

6) 건립부지 현황측량, 지질조사, 각종 심의, 위원회, 협의, 심사, 감사 등은 업무범위에 포함되며, 소요비용은 설계용역비에 포함된 것으로 설계자 부담사항임

7) 총공사비는 사업예산을 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

나. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) 창호, 내외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

2) 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야 한다.

3) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 이용환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도를 반영하여 설계하여야 한다.

4) 이용자의 편리성과 관리의 효율성이 확보되도록 설계하여야 한다.

5) ｢신에너지 및 재생에너지 개발･이용･보급촉진법｣,｢신･재생에너지설비의지원 등에 관한 규정｣,｢신･재생에너지설비의 지원 등에 관한 지침｣, ｢공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정｣ 등에 적합하게 신재생에너지 설비 설치 및 에너지절약계획서 작성하여야 한다.

다. 미래지향적이고 친환경적 첨단시설로 설계

1) 친환경적으로 설계하여야 한다.

2) 이용자 편의를 위한 설비와 구조로 구상되어야 한다.

3) 인터넷을 이용하여 선진국형 정보 네트워크를 구축하여야 한다.

4) 전기 및 정보통신분야(특히 LAN 분야 등)는 미래지향적인 기술기준을 적용하여야 한다.

5) 모든 기준은 최신 법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용하여야 한다.

라. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 조경포장, 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 등 환경 친화적으로 설계하여야 한다.

마. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

바. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(사무 및 전시실 용도 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안전성이 확보되도록 설계하여야 한다.

2) 지반조사 보고서의 결과에 따라 합리적인 기초계획이 이루어진 설계를 하여야 한다.

사. 주요자재 사용계획

1) 시공자재는 지역의 우수제품을 활용할 수 있도록 설계하여야 한다.

2) 환경표지인증, GR마크인증 등의 친환경제품인증을 취득한 마감자재를 사용하여야 한다.

3) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며, KS제품이 없을 경우 국내자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정하고 소방관계법에 의한 방염시설기준을 적용한 자재를 사용하여야 한다.

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영(다만, 발주기관과 사전협의 후 적용)하여야 한다.

6) 설계도서에 특정업체의 제품을 명시할 수 없으며, 부득이 반영이 필요한 경우에는 감독원과 협의 후 진행하여야 한다.

2. 공공건축물 사업계획 사전검토 사항

가. 입지 고려사항

1) 건립부지 남측에 평내호평역(경춘선)이 인접하여 위치하여 차량 및 보행자의 통행량이 많으므로 이에 따른 공사 중 어려움에 대하여 설계 및 공사계획을 수립하고, 인근시설의 구조안정성을 확보하고 민원을 최소화할 수 있는 공사계획과 공법을 선정하며 안전한 통행환경을 확보할 수 있도록 한다.

- 지하층 조성 시 인접 역사 및 철로 등의 구조 안전성을 고려한 공법 적용

- 공사 중 소음, 분진, 진동으로 인한 인근 주민 피해를 최소화

- 차량 접근을 최소화하고 대중교통 이용 및 보행접근을 활성화할 수 있도록 계획 수립

2) 부지 주변 지하매설물(상･하수도, 전력, 지역 냉･난방(도시가스) 등 도시기반시설)을 조사하여 설계에 반영･계획한다.

3) ｢건축법｣제48조(구조내력 등)에 따라 본 건축물은 내진설계 대상에 해당하므로 관계법령에 의거하여 설계에 반영･계획한다.

나. 건축디자인 기본방향

1) 외부공간계획

① 이용자 편의를 고려하여 쾌적한 진입공간 및 옥외 휴게공간 조성

- 건립부지((가칭)청년창업캠퍼스)와 인접한 (가칭)문화광장 및 (가칭)청년힐링공원과 연계하여 보행자 및 방문객 접근이 편리한 위치에 공개공지, 옥외 휴게공간 등 오픈 스페이스를 조성하고 출입구를 설치하며, 특히 불특정 다수가 이용하는 시설이므로 각종 행사, 화재 시 신속한 대피를 고려하여 외부공간을 계획한다.

- 도로와 면하는 외부공간은 대중교통 이용자 및 보행자를 고려하여 안전한 통행환경으로 조성한다.

② 장애인 및 노약자, 영유아 동반 이용자의 이용편의 고려

- 휠체어 보관소 및 대여소, 유모차 보관소 및 대여소를 반영한다.

- 주출입구까지 진입동선 상 차양 설치, 차량으로부터 안전성 확보한다.

③ 눈, 비 등으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 포장마감재 선정 시 유의한다.

④ 지역 청년들의 커뮤니티 거점공간으로 안전하고 쾌적한 외부공간을 조성한다.

2) 동선계획

① 부지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 차량동선이 보행동선과 간섭되지 않도록 유의한다.

② 화재 및 비상시의 대피동선, 소방진입용 동선을 확보하고 특히 장애인 유형별 피난대책을 고려한다.

③ 장비 반‧출입, 유지관리, 서비스 및 하역을 위한 별도의 동선을 확보한다.

3) 주차계획

① 부지가 협소하므로 주차장은 최소화(법정 주차대수 준수)하여 외부공간을 충분히 확보한다.

② 주출입구 인근에 자전거보관소 설치를 고려한다.(지하층에 실내로 구획된 다층 보관시설도 검토 가능함)

③ 관련 시설 및 장비의 이동에 필요한 서비스 동선과 하차공간(Loading Dock 등)을 고려한다.

4) 규모, 공간 및 시설계획

① 공간별 기능 및 특성을 고려하여 합리적인 조닝(Zoning) 계획

- 공간을 통합적으로 계획‧운영할 수 있도록 유연한 공간으로 설계하여 다기능 문화공간의 특성을 고려한 유연한 소요 면적을 계획한다.

- 화재 등의 비상시를 고려하여 로비, 복도, 홀, 화장실 등의 면적을 여유있게 확보하고 출입구 전면 공간의 면적도 여유있게 확보한다.

② 시설별 운영시간대에 따른 동선 및 배치기준 검토

- 주‧야간‧공휴일 등 이용시간을 고려하여 출입구 및 동선이 구분될 수 있도록 계획한다.

- 야간 시설 운영 시 소음‧조명 발생으로 인근 주민피해를 최소화하도록 계획한다.(지하층 배치 등)

③ 카페 등 일부 편의시설은 단순히 식음을 제공하는 곳이 아니라 지역 청년들의 거점으로 활용될 수 있도록 휴게, 독서, 모임 등의 활동이 가능한 공간 조성

- 외부공간과 연계를 고려하여 외부에서 접근이 용이하도록 배치 할 것

④ 문 손끼임 방지, 바닥미끄럼 방지, 모서리 및 각진 부분의 안전장치 적용 등을 통해 생활안전사고를 방지할 수 있도록 계획한다.

⑤ 용역원 관련 실이 누락되지 않도록 유의할 것.

⑥ 일부 공간에 대해서는 스마트오피스(IT기반 사무실) 활용방안을 검토하여 계획한다.

5) 친환경 기준 적용

① 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에 따라 신·재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하고, 예상 에너지사용량에 대한 신·재생에너지 공급의무 비율을 준수하도록 본 시설의 외부디자인과 지역적 특성 등을 고려한 적정방식을 검토하여 계획한다.

② 태양열, 태양광, 지열 등 신재생에너지 활용과 관련한 적합한 설계안이 도출될 수 있도록 검토･계획한다.

③ ｢녹색건축물 조성 지원법 시행령｣ 제10조에 따른 [에너지 절약계획서]를 작성･제출한다.

④ 건축물의 특성에 부합하는 제로에너지 기법을 반영할 것

- 다중 이용시설의 특성을 고려할 때 반드시 방풍실 또는 회전문을 설치하여 실내 온도 조절이 용이하도록 계획한다.

- 다중 이용시설의 경우 에너지성능과 함께 실내 환경의 질을 최대한 확보할 수 있는 계획이 필요하며, 관련 법령에 따른 실내공기질 유지 및 권고기준을 적용한다.

⑤ 환경 친화적이며 에너지효율을 향상시킬 수 있는 시설로 조성될 수 있도록 다음 사항을 고려한다.

- 사람이 상주하거나 사용빈도가 높은 실은 가급적 남축에 배치

- 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려

- 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

- 자연광, 우수 등의 자연요소를 적극적으로 도입한 친환경 건축 및 에너지소비 최소화 계획이 가능하도록 반영한다.

6) 품격 제고 : 지역의 모범이 될 수 있는 공공건축물이 조성될 수 있도록 다음 사항을 고려한다.

① 주변 환경 및 인근 시설과 조화를 고려한 외부공간 계획 및 배치계획을 반영한다.

- 전체 경관을 고려한 시설 디자인, 재료 및 색상 계획을 통해 시설의 품격과 품질 제고를 위한 건축디자인을 적용한다.

② 입면 위주 또는 장식적인 디자인으로 인한 과도한 설계는 지양한다.

③ 휴게, 녹지공간 계획 시 시설이용자의 편의를 제고한다.

④ 외국인 및 장애인, 임산부 등의 이용 편의를 고려한다.

- 색채 및 사인계획(픽토그램 등)은 비상시 직관적인 상황판단이 가능하도록 고려한다.

- 장애인의 편의 증진 방안을 적극 반영한다.

- 유니버설 디자인(Universal Design)을 적극 반영한다. (건축마감 및 가구 디테일 처리, 휴게공간, 문손잡이 등)

※ 경기도 유니버설디자인가이드라인(2011, 경기도), 유니버설디자인 실태분석 및 문화적 적용방안 연구(2012, 문화체육관광부), 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인(2017) 참고

⑤ 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내･외부공간의 조성을 계획한다.

3. 사전조사에 관한 사항

가. 토질조사 및 시험

1) 토공설계에 필요한 기초자료를 수집하기 위한 사전조사로서 토질의 상태 및 사토장 후보지를 결정하여 경제적 설계가 되도록 한다.

2) 토질조사 시추지점을 평면도상에 표고와 함께 기입하여야 하며, 시추는 구조물 실시설계에 필요한 곳을 감독원과 협의하되 기본적으로 2개소 이상을 보링 한다.

3) 토질조사 시추점도는 연암, 보통암 또는 경암까지 실시하여 기반 암층을 확인하도록 하며, 표준관입 시험을 시행하고, 조사가 완료된 시추공에 대하여는 24시간 및 48시간 경과 후 지하수위를 측정하여 시추 주상도에 기록한다.

4) 지하 터파기 등에 의해 지하수위 강하 발생에 따른 주변 구조물 영향을 파악하여 침하, 균열, 붕괴에 대비한 철저한 안정성 검토를 하여야 한다.

5) 토질조사 시추결과 주상도를 작성하고, 토질에 대한 종류와 성분 분석 및 시추작업사진, 토질조사 시료 및 코아는 주상도와 부합되게 관찰 및 보존에 편리하도록 상자에 보관하여야 한다.

6) 연약지반 성토부는 성토재료 및 기초지반에 대한 소요시험을 시행하여야 한다.

7) 암반 시추 시 암반선의 종류, 풍화의 정도, 균열의 간격, 균열의 구조 방향 등을 철저히 조사하여 구조물의 실시설계와 합리적인 사업비산정, 구조물의 안정성, 경제성 및 기술적 비교검토 후 가장 적절한 공법을 제시하여야 한다.

나. 조사측량

1) 측량에 필요한 도근점은 인근 삼각점으로부터 삼각측량을 실시하여 골고루 확정하여야 한다.

2) 현황측량은 실시설계에 지장이 없도록 과업범위 이상 여유 있게 측량해야 한다.

3) 경계측량은 지적공사에 의뢰하여 경계를 측량해야 한다.

4) 평면 측정은 도로 및 주변 건축물 구조물 등을 정확히 측정 표시하고 축척은 1/500(또는 1/600, 1/1,200, 발주기관 협의)으로 기입한다.

5) 지적도는 구청에 비치된 지적원도를 기본으로 한다.

다. 지장물 조사

1) 지장물 조사는 계획선 내의 토지, 도로, 가옥, 공작물, 통신 및 송배전 시설 등 일체의 보상 물건에 대하여 토지대장 및 건축물대장들의 관련공부를 기준으로 구 물건을 현지답사 확인하여 건수별로 조사를 시행하며, 현재의 이용 상황 등을 상세히 조사 하여야 한다.

2) 지장물도에는 건축물, 공공시설, 하수도, 가로수, 한전, 통신주 및 지하선로 가드레일, 상수도, 교통표지판, 전철 등 공사구간내의 각종 구조물을 상세히 명시하고 별도 조서를 작성 제출한다.

3) 지장물건조서는 물건별 사진을 촬영하여 조사원본에 첨부하여 납품하고 인･허가 서류에 필요한 국･공유지용지조서, 도면 등을 별도 작성하여야 한다.

4. 건축분야

가. 건축 기본방향

1) 건축물은 상징성과 개방감, 실용성에 중점을 두고 계획하며, 실제 기능에 상관없이 과도한 공사비 상승에 영향을 주는 입면재료는 가급적 배제하도록 한다.

2) 건축물 이용 효율 측면에서 최적화가 될 수 있도록 설계하고, 주변 경관을 고려하여 건물의 배치, 형태 등은 주변 환경과 조화를 이루는 자연 및 환경친화적인 계획으로 한다.

3) 동선계획 시 보행자의 안전을 우선 확보하고 이용자별 보행․차량 동선을 분리하며, 재난 발생 시 피난을 고려한 동선 및 시설계획을 반영하여 설계한다.

4) 건축물은 유지관리가 용이하도록 하고, 에너지 절약효과를 극대화할 수 있도록 경제적인 설계를 하여야 한다.

5) 건축자재는 인체에 유해하지 않은 친환경자재를 사용하여야 한다.

6) 청년활동거점공간으로서의 이미지를 살리도록 하여야 한다.

나. 일반 고려사항

1) 건축물에 관한 사항

가) 건물의 외관과 관련하여 다음의 사항을 검토･반영한다.

(1) 주변 환경과 조화

(2) 건물의 기능, 지리적 조건 등에 의한 조형미 구현

(3) 기능상 불필요한 지나친 의장효과 억제

(4) 색채의 조화 및 통일성 유지와 질감의 적정성 확보

(5) 내구성 있고 유지보수가 용이한 재료 선정

나) 재료 및 마감계획과 관련하여 다음의 사항을 검토･반영한다.

(1) 창호는 고효율에너지 기자재인정 품목인 고기밀성 단열창호 등을 설치하여 에너지 절감 및 방음, 방범, 기밀성을 확보 할 수 있도록 하며, 개폐되는 창에는 방충망을 설치한다.

(2) 복도, 홀 및 로비 등 공용부분의 바닥 및 벽체의 마감은 내구성과 경제성을 고려하여 계획한다.

(3) 창이 설치되는 각 실은 커텐, 블라인더 등을 고려하여 계획한다.

다) 사용상 적정규모 및 사용

(1) 각 실 수용인원의 규모를 판단하여 적정규모로 설계한다.

(2) 수용내부시설, 기자재의 크기, 용량 및 대수 등과 관련 부족하거나 과다하지 않도록 사용수요를 예측하여 적정규모로 설계한다.

(3) 인체공학 및 사용기기의 재원에 맞는 치수로 설계한다.

- 출입구 크기의 적정화

- 천장고 및 창문높이 검토

- 부대시설 크기 및 설치위치 검토

- 각부 치수의 표준화 및 자료의 규격화

라) 이용에 합리적인 시설(실, 기기, 장비 등) 배치를 위하여 다음의 사항을 검토･반영한다.

(1) 가급적 동선을 단축하여 사용자가 편리하도록 동선계획

(2) 요구기능에 따라 동선 분리

(3) 상･하층의 수직 동선의 검토

(4) 비상시 대피를 위한 비상 동선계획

마) 비상시 대응키 위한 다음 시설의 확보를 검토･반영한다.

(1) 피난시설 (피난계단, 통로, 비상구 및 옥외공간 등)

(2) 화재 시 연소방지를 위한 시설 (방화벽, 방화문 등)

(3) 방화 상 필요한 구조 및 재료의 시공

(4) 오염방지시설의 시공

바) 에너지 절약을 위하여 다음 사항을 검토･반영한다.

(1) 단열효과 제고를 위하여 외벽, 바닥 및 천장의 구조, 재료 검토

(2) 자연채광, 자연환기를 이용한 설계

사) 방수, 누수･결로 방지 등과 관련하여 다음 사항을 검토･반영한다.

(1) 지하수압 작용에 따른 방수 대책

- 지하수위 및 수압검토

- 방수재료 및 공법의 적정화 검토

- 방수층을 통과하는 각종 배관 주위 방수대책 강구

(2) 우수침투에 따른 대책

- 지붕 및 외벽부분에 대한 우수침투 대책(방수재료 및 공법)

- 개구부 주위 누수 방지대책

- 돌출 부분 등 물끊기

- 화장실 등 물을 사용하는 경우에 대한 방수대책

(3) 결로 방지를 위한 검토

- 외벽의 실내에 면한 부분의 구조(노점온도 이상이 되도록 처리)

2) 배치계획

가) 주변여건(연계 활성화 검토 대상인 (가칭)문화광장 및 (가칭)청년힐링공원의 기본구상 포함)을 고려하여 녹지 공간, 주차장구역, 차량/보행자 진․출입 구역 등 대지이용계획을 결정하여야 한다.

나) 주변시설물과 일조 등의 고려와 건물 간 및 인접 시설과의 거리 확보, 환경 및 지형, 향 등에 대하여 충분히 고려하여 에너지 관리 측면에서 유리하도록 결정한다.

다) 외부의 적정 휴게공간과 부대편의시설 설치에 관한 사항을 고려한다.

라) 건물의 출입구는 장애자용 편의 통행을 고려한다.

마) 수목, 암석 등의 기존 조경재의 활용이 가능한 배치

바) 주변 인접시설과의 연계성이 고려된 배치

(1) 방화 및 피난을 위한 설계

(2) 적정규모의 휴식 공간 확보

(3) 추가 소요시설 면적의 확보 및 적정배치

(4) 인접시설과 연계하여 포장시설 배치

3) 평면계획

가) 상호 관련성을 갖는 기능단위들을 인접하게 배치하여 기능이 효율적으로 구성될 수 있도록 하고, 불필요한 동선이 유발되지 않도록 계획한다.

나) 기능 단위 간 인접성을 최대한 제공하기 위하여 건물의 평면이 길어지는 경우 암실의 발생을 최소화하고 자연채광, 자연환기를 최대한 이용한다.

다) 장애인의 각종시설 이용에 필요한 편의시설을 설치한다.

라) 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하고 상호 연계적인 동선을 계획한다.

마) 관련 소방규정에 준한 대피시설을 충분히 고려한다.

4) 입면계획

가) 전체적으로 안정감 있는 규모계획으로 주변 환경과의 조화를 고려하고 현대적인 균형미와 통일감을 확보한다.

나) 외부 입면은 색채계획을 고려하여야 한다.

5) 단면계획

가) 건축설비의 집중 등을 위하여 층높이를 적절히 설정하고 층간 방음계획을 충실히 계획한다.

나) 수직교통 및 화물의 이동이 원활하도록 단면계획을 한다.

다) 냉･난방효율 합리화 등 시설이 효율적으로 운영될 수 있는 건축물 단면계획을 검토한다.

6) 주차장 계획

가) 주차공간은 관련법규 기준 이상으로 확보하며 환경 친화적으로 계획한다.

나) 장애인 주차장과 교통 안내표지판 등을 설치하되 야간 이용자들을 배려한 주차장이 될 수 있도록 계획한다.

다. 구조계획

1) ｢건축법｣, ｢건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙｣, ｢건축물의 하중기준｣ 및 기타 건축구조 관련 규정에 적합하게 하여야 한다.

2) 건축물은 고정･적재･적설하중, 풍압, 지진, 그 밖의 진동 및 충격 등에 대하여 안전한 구조를 가져야 하며, 건축물의 규모와 관계없이 건축구조기술사가 건축물의 구조도, 구조계산서 등 구조 관련 서류를 작성하고 서명날인 하여야 한다.

3) 건축구조의 안전성 및 경제성과 관련하여 다음 사항을 검토･반영한다.

가) 각 실의 기능 및 부대설비에 적정한 층높이 결정

(1) 냉난방 열손실, 층높이에 따른 시설투자비, 보 단면 설계방법 등 검토

나) 구조에 있어 경제적이고 시공이 용이한 구조를 선택하여야 한다.

(1) 구조상 불필요한 부분의 삭제 및 부재단면 적정여부 검토

(2) 시공 및 구조계산법이 용이한 구조계획

(3) 구조의 안전에 필요한 부재의 최소 단면 결정

다) 지반상황에 적합한 기초구조를 선택 및 설계하여야 한다.

(1) 적정한 지내력의 판단

(2) 기초의 구조 및 시공방법의 결정

5. 설비분야

가. 일반 고려사항

1) 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

4) 자동화 운전관리를 통하여, 업무효율의 극대화 및 인력 절감을 꾀할 수 있도록 계획한다.

5) 에너지 및 수자원 절약을 극대화 할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

6) 화재, 수재 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

7) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

8) 사무실 및 디지털자료실의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

9) 엘리베이터는 ｢승강기시설 안전관리법｣ 규정에 적합하게 설치하고 장애인의 사용에 불편이 없어야 한다.

나. 에너지, 열원 설비

1) 신재생에너지 사용을 적극 고려하여 계획을 수립한다.

2) 고효율 기자재의 사용을 비롯한 에너지를 절감할 수 있는 건축기법을 반영한다.

3) ｢건축물의 에너지절약 설계기준｣, ｢공공기관 에너지절약 추진지침｣, ｢공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정｣ 등 정부의 에너지절약 정책과 환경오염 관련정책을 적극 수용하여 환경친화적인 건축물이 되도록 설계한다.

다. 냉․난방 공조 설비

1) 각 실별 부하 조건을 고려하여 에너지절약형 설비방식으로 계획한다.

2) 기계실 장비 및 기기는 적정하게 배치되도록 계획한다.

3) 전관에 냉난방설비를 완비하여야 하며, 개별 냉․난방 방식을 적용하고 사무실에서 실별 제어가 가능한 시스템으로 구축하여 에너지 절약을 위한 설계를 하여야 한다.

라. 위생설비

1) 내구성, 수두압 등을 감안하여 재질이나 규격을 선정한다.

2) 배관 경로가 전기실, 배전실 등을 통과하지 않도록 계획한다.

마. 소방설비

1) 화재발생 시 초기진압이 가능하고, 연기확산을 최소화하도록 계획한다.

2) 유사시 인명피해를 최소화하고 건물의 안전성을 확보할 수 있도록 계획한다.

3) 각 실의 용도별 소방설비 기준에 적합하도록 계획한다.

바. 환기설비

1) 각 실별로 적절한 환기방법을 검토하여 계획한다.

2) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제 배기를 병행 가능하도록 검토 설계한다.

6. 토목․조경분야

가. 토목분야

1) 건축물 부대토공사이므로 건축계획과 공사부지의 지형, 토질, 암반 상태, 지하구조물 등 현장을 철저히 분석 조사․검토하여 구조계산에 반영하고 최소한의 물량 산출 및 경비를 산정한다.

2) 일반 토목 설계 법규 및 지침 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가 확인하고 설계에 반영하여 안전한 설계가 되도록 한다.

3) 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 토목 공종, 장비 및 자재 선정 등으로 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

4) 상수도 분기 예상지점의 관경 및 수압, 하수도 계획 수량을 충분히 고려하여 설계되어야 한다.

나. 조경분야

1) 조경은 건축법에서 요구하는 대지안의 조경기준 등 조경공사 설계에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수하여 작성한다.

2) 조경은 대상지의 환경을 고려하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면의 디자인 요소를 반영하며 주변 환경과 조화를 이루는 계획을 하여야 한다.

3) 외부공간은 인접한 연계 활성화 검토 대상((가칭)문화광장 및 (가칭)청년힐링공원)의 기본구상안을 감안하여 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보하여 조성한다.

7. 전기 분야

가. 일반 고려사항

1) 초기투자비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

4) 화재, 수재 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

5) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

6) 사무실 및 디지털자료실의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

7) 전기설비는 미래지향적인 기술을 적용하며, 최근 개정된 법령 중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

나. 에너지, 열원 설비

1) 신재생에너지 사용을 적극 고려하여 계획을 수립한다.

2) 고효율 기자재의 사용을 비롯한 에너지를 절감할 수 있는 건축기법을 반영한다.

3) ｢건축물의 에너지절약 설계기준｣, ｢공공기관 에너지절약 추진지침｣, ｢공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정｣등 정부의 에너지절약 정책과 환경오염 관련정책을 적극 수용하여 환경친화적인 건축물이 되도록 설계한다.

다. 수변전, 동력 및 전열설비

1) 부하의 설비용량을 정확히 산출하고 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여한다.

3) 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

4) 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하고 용도에 알맞는 전압을 선정하여 콘센트를 설치한다.

8. 통신분야

가. 일반 고려사항

1) 초기투자비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

4) 본 설계는 정보통신설비의 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 하여야 하며 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

5) 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보 하여야 한다.

6) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

7) 최근 개정된 법령 중 관련법규(정보통신, 방송, 소방 등)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

제3장  설계 진행사항

1. 설계도서 작성

가. 일반사항

설계도서의 작성방법은 발주기관이 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 감독원과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다.

나. 작성지침

1) ｢건설기술 진흥법｣ 제48조(설계도서의 작성 등), ｢건설기술진흥법시행규칙｣ 제40조(설계도서의 작성), ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준｣, 기타 관련법규에 의한다.

2) 예정공정표는 네트워크방식으로 작성하여 제출한다.

3) 설계내역서 작성은 조달청 전산표준 호환 텍스트파일(확장자*.TXT) 및 Microsoft Excel (2002)과 호환되도록 작성하며, 일위대가는 표준품셈을 적용 산출하여 작성한다.

4) 단가 적용은 기획재정부에 등록한 전문가격조사기관이 조사하여 공표한 가격 3개 이상 조사하여 단가조사표를 작성한 후 최저 가격을 적용하여 산정하고, 단가산정이 불가능한 경우는 동일항목에 대하여 견적을 2개소 이상 제출받아 이를 적용하여 내역서를 작성한다.

5) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하고 발주 단위별(건축+토목+조경+기계설비, 전기, 통신, 소방)로 설계도서를 작성하여야 하며, 관급자재는 발주기관이 직접 구매할 수 있도록 분리 작성 하여야 한다.

6) 공사시방서는 표준시방서를 작성하고, 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성한다. 표준시방서는 국토교통부에서 고시하는 각 공사분야별 표준시방서를 기준으로 작성하고, 특별시방서는 자재 관련 시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 기술한다.

7) 기타 설계서의 작성기준은 감독원의 지시에 의한다.

2. 설계용역 착수 시 제출서류

수급인은 계약 체결 후 7일 이내에 작업에 착수해야 하며, 착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.) 2부를 제출하여야 한다.

가. 착수계

나. 책임기술자 선임계(서식3) [기술경력증명서 1부 첨부]

다. 설계용역 참여기술자 현황 및 투입계획서 (총괄책임기술자, 분야별 책임기술자, 분야별 참여기술자로 구분하여 기재하며, 소속(업체명), 업무내용(분야), 성명, 주민번호 앞자리, 등급, 자격증, 참여예상기간 등 기재한다.)

※ 참여기술자는 관련법 규정에 적합한 자격요건 이상을 갖춘 자이어야 함.

라. 설계용역수행 조직표

마. 설계 예정공정표(서식4)

바. 낙찰금액에 대한 산출내역서

사. 과업내용서

아. 하도급 예정현황

자. 보안각서(서식1) 및 보안대책

차. 손해보험가입증서 또는 공제증서(용역 준공 시 제출가능)

카. 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

3. 설계도서 납품목록

가. 일반사항

1) 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』[별표2] 건축설계에서의 도서작성을 기준으로 도서를 작성하여야 하며, 아래 각각의 설계단계별 납품도서에 도서작성내용이 첨부될 수 있도록 하고, 불가피하게 첨부할 수 없을 경우 별도의 도서로 납품할 수 있다.

2) 기타 발주기관이 원하는 사항에 대하여는 자료를 추가 작성하여 제출한다.

나. 계획설계 납품도서

구분	목 록	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계보고서	A4	2	부	건축계획서, 법규검토서, 개략공사비포함
2	지반조사보고서	A4	2	부
3	현황측량보고서	A3	2	부
4	지장물건조사도	A3	2	부	도면첨부
5	조감도	A3	2	조	개략적인 3차원 이미지
6	설계도면	A3	2	부	배치도(주차, 포장, 식재 포함), 각층 평면도, 입면도(2면 이상), 종･횡단면도 포함

주)	1. 납품도서는 감독원과 협의하여 조정될 수 있음.

다. 중간설계 납품도서

구분	목 록	규격	수량	단위	비 고
1	중간설계보고서	A4	3	부
2	설계도면	A4	3	부	배치도, 주차계획도, 구조도, 각층 평면도, 입면도(2면 이상), 종･횡단면도, 분야별 계통도 및 평면도 포함
3	색채계획서	A4	3	부
4	조감도	A3	2	조
5	USB메모리	8G이상	1	개	기초조사 납품도서 포함

주)	1. 납품도서는 감독원과 협의하여 조정될 수 있음.

2. 중간설계보고서 포함사항 : 공사개요, 건축물 규모, 분야별 설계설명서(기계, 전기, 통신계획개요서 포함), 개략공사비, 법규검토서, 향후 실시설계 방향 등

라. 실시설계 납품도서

구 분	목 록	규 격	수 량	단 위	비 고
1	종합보고서	A4	3	부
2	설계설명서	A4	3	부
3	설계도면	A2, A3	각 8	부	반책 3부
4	계산서	A4	8	부
5	내역서	A4	8	부
6	일위대가	A4	8	부
7	단가산출서	A4	8	부	견적서 포함
8	수량산출서	A4	8	부
9	주요자재결정서	A4	5	부	관급자재 포함
10	주요자재사양서	A4	5	부	관급자재 포함
11	시방서(표준, 특별)	A4	8	부
12	조감도	A2	2	조	액자 포함
13	공사예정공정표	A3	3	부
14	USB메모리	8G 이상	3	개
15	기타 발주처 요구사항				필요시

주)	1. 종합보고서에는 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

2. 공사예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 정확하게 작성․제출하여야 한다.

3. 납품수량 등은 발주기관 필요시 추가납품을 요구할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 감독원과 별도 협의한다.

〔서식 1〕 보안각서

보  안  각  서

1. 용 역 명 :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 준공예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행 중 취득한 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약일반조건 제9절 2호(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 건설기술용역계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주청에게 귀속됨을 알고 별도로 발주청의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2019.    .     .

주    소 :

생년월일 :

기술분야 :

성    명 :           (인)

남양주도시공사 사장 귀하

〔서식 2〕 월간업무보고

월 간 업 무 보 고

□ 용역개요

□ 용 역 명 :

□ 용역기간 : 2019년  월  일 ∼ 2019년  월  일

□ 계약금액 : ○○○원

□ 00월 용역업무보고(공정률 00%)

구분	금월 추진 사항	익월 추진 예정 사항	비고
첫째 주
둘째 주
셋째 주
넷째 주
다섯째 주

책임기술자 :           (인)

남양주도시공사 사장 귀하

〔서식 3〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자  선 임 계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : 금○○○원

3. 계약일자 : 2019.   .   .

4. 착수일자 : 2019.   .   .

5. 준공예정일 : 2019.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2019.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

남양주도시공사 사장 귀하

〔서식 4〕 설계 예정공정표

설계 예정공정표(예시)

구 분	착수일로부터 개월														비고
	20일		40일		60일		80일		100일		120일
1. 현황조사ㆍ측량 및 지반조사
2. 계획설계
3. 중간설계
4. 실시설계
5. 각종 심의, 협의 등 (경관, 기술자문, 건축협의, 각종 인증, 심사, 감사 등)															행정절차 이행 소요기간은 용역정지 또는 기간연장
6. 기 타