남양주도시공사 공고 제2025-416호

건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고

「건설기술진흥법」제62조, 같은 법 시행령 제100조의2 및「건설공사 안전관리 업무수행 지침」제18조에 따라 건설공사 안전점검 수행기관을 지정하고자 아래와 같이 공고 합니다.

2025년 11월 04일

남양주도시공사 사장

1. 공고기간 : 2025.11.05. ∼ 2025.11.07.

2. 신청자격

가. 남양주도시공사 공고 제2025-353호 건설공사 안전점검 수행기관 등록명부에 고시된 수행기관(전문분야 : 건축)

3. 대상 사업

가. 공 사 명 : 별내노인복지관 건립사업 건축공사

나. 공사기간 : 2025.10. ∼ 2027.03.

다. 공사금액 : 11,055백만원(VAT 포함)

라. 시 공 사 : ㈜시티건설 등 2개사

마. 건설사업관리단 : ㈜종합건축사사무소 가람건축 등 2개사

바. 정기안전점검비 : 49,914,422원(VAT 별도)

사. 안전점검 기간 : 계약일부터 ∼ 공사준공까지

4. 안전점검 내용

가. 안전점검 과업의 범위는 「건설기술진흥법」, 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 등 관련 규정의 점검 기준을 따르며, 점검 완료 후 종합보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

나. 점검 공종(총 16회)

점검대상	점검차수	예상시기	공사별 시기
건축구조물	1회	2026년 03월	기초공사 시공시(콘크리트 타설전)
	2회	2026년 07월	구조체공사 초·중기 단계 시공시
	3회	2026년 11월	구조체공사 말기 단계 시공시
10m이상 굴착공사	1회	2026년 03월	가시설공사 및 기초공사 시공시(타설전)
	2회	2026년 08월	되메우기 완료후
폭발물을 사용하는 건설공사	1회	2025년 12월	총공정의 초·중기단계 시공시
	2회	2026년 01월	총공정의 말기단계 시공시
천공기 (높이10m 이상)	1회	2025년 11월	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시
	2회	2026년 02월	천공 작업 말기단계시
5m이상 거푸집동바리	1회	2026년 04월	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시
	2회	2026년 06월	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시
높이2m이상 흙막이지보공	1회	2026년 01월	흙막이지보공 최초 설치 완료시
	2회	2026년 03월	흙막이지보공 설치 완료 말기 단계시
현장조립복합 가설구조물	1회	2026년 04월	조립·설치 최초 완료시
	2회	2026년 06월	가설구조물 사용 말기 단계시
건축구조물(초기)	1회	2027년 01월	준공 3개월 전

※ 전체 예정공정표를 감안한 안전점검시기를 반영하였으며, 향후 공정 진행 및 현장 여건 등에 따라 점검시기, 점검내용 및 횟수는 조정 가능

5. 입찰서 제출

가. 접수기간 : 2025.11.05. ∼ 2025.11.07.  (16:00 까지)

나. 접수장소 : 남양주시 다산지금로36번길 21-8 트윈타워B동 8층 (남양주도시공사)

다. 접수방법 : 방문접수

라. 제출서류 :

- 참가신청 공문, 사업자등록증 사본 및 법인등기부등본

- 안전점검 수행기관 지정 신청서

- 안전점검 수행기관 가격제안서

- 안전점검 수행기관 자기평가서

- 기술자 보유현황, 유사용역 수행실적

- 점검·진단 실시결과에 따른 평가결과

- 신용평가등급 확인서(공고일 기준 최근 1년 이내 평가 확인서), 서약서

마. 유의사항

- 입찰가격은 부가세를 제외한 금액입니다.

- 지정업체 결정 방법은 붙임(세부평가기준)을 참조하여 주시기 바랍니다.

- 안전점검 수행기관 지정 신청서류는 방문제출(입찰서는 봉투에 넣어 밀봉하고 밀봉한 자리에 신청업체 도장을 찍어 제출)하여야 하며, 낙찰 후 증빙서류와 응모서류 대조 시 기록누락 및 미제출된 서류로 인한 불이익(실격처리 등)은 신청인의 책임입니다.

6. 수행기관 지정방법

가. 붙임2 수행기관 지정 세부평가기준에 따름

7. 기타사항

가. 안전점검 수행기관 지정을 위한 제출서류 등이 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 작성된 것으로 판명될 때에는 안전점검 수행기관 등록명부에서 제외되며, 안전점검 수행기관 지정결정이 취소될 수 있습니다.

나. 수행기관 사업수행능력 세부평가내용은 공개하지 않으며, 수행기관으로 지정된 업체에만 통보 됩니다.

다. 세부일정은 추진상황에 따라 다소 변경 될 수 있습니다.

라. 수행기관 지정 이후 사업 취소 등 부득이한 사유가 발생되면 수행기관 지정은 자동으로 취소되며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

마. 평가 진행 과정에서 평가기준의 누락, 오류 등에 대한 사항은 평가 위원회를 통해 결정됩니다.

바. 안전점검 금액은 안전관리계획서상 산출된 금액으로 향후 시공자와 협의 및 계약 시 변동될 수 있습니다.

사. 수행기관 평가서는 1부 제출하고, 작성에 소요되는 비용은 작성자가 부담하여야하며 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

아. 본 공고문에 명기되지 않은 사항에 대해서는 「건설기술진흥법」 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 규정을 우선 적용합니다.

자. 남양주도시공사 안내

- 주 소 : 남양주시 다산지금로36번길 21-8 트윈타워B동 8층(남양주도시공사)

- 문 의 : 개발사업3부(031-560-1161, ncuc.gippp@gmail.com)